ДОГОВОР ПОСТАВКИ.

_____________________________, далее по тексту «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и
ЗАО «Армроскогенерация», далее по тексту «Покупатель», в лице ______________________________, действующею на основании ____________________, с другой стороны.

Покупатель   и    Поставщик   в   дальнейшем    в отдельности  именуются  «Сторона», а вместе «Стороны»,
Заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1, Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю когенерационную установку на базе двигателя _______________ (далее но тексту «Оборудование»), согласно Приложению №1  к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора, осуществить шеф-монтажные, пусконаладочные работы, инструктаж персонала по эксплуатации оборудования, инженерное сопровождение проектных работ по привязке Оборудования, а Покупатель обязуется принять указанное Оборудование и в установленные Договором сроки выплатить предусмотренную договором цену.

1.2 Оборудование состоит из силовой генераторной установки ___________ (далее по тексту «Установка») и дополнительного технологического оборудования _______ (далее по тексту «Технологическое Оборудование»), указанных в Приложении 1 настоящего Договора. Завод-изготовитель Оборудования - __________________.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент подписания данного Договора на Оборудование не наложены взыскания или конфискации, оно не находится под залогом, запретом или арестом.

2. Цена и условия платежа

2.1. Цена Договора составляет _______________________ , которая включает в себя расходы по доставке Оборудования в Ереван, Республика Армения (РА) до место, указанного Покупателем в отгрузочной разнарядке, направленной Поставщику после получение от него уведомления о готовности Оборудования к отгрузке со склада Поставщика в г. Ереван, жилой микрорайон Аван (далее по тексту «Склад Покупателя»), а также налог на добавленную стоимость и расходы на шеф-монтажные, пусконаладочные работы, инструктаж персонала по эксплуатации оборудования и инженерное сопровождение проектных работ но привязке Оборудования.

2.2. Покупатель обязуется выплатить Поставщику сумму, предусмотренную пунктом 2.1. данного Договора, в следующем порядке:

1. 20% от цены Договора, что составляет ________________________, выплачивается в качестве предоплаты в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора;

2. 50% от цены Договора, что составляет ________________________ выплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты поставки Установки на склад Покупателя, что подтверждается подписанным Сторонами Актом осмотра Установки.

3. 20% от цены Договора, что составляет _______________________ в течение 5 (пяти) банковских дней по факту монтажа с даты поставки Технологического оборудования на склад Поставщика в республике Армения, что подтверждается подписанным Сторонами Актом осмотра
Технологического Оборудования.

4. 10% от цены договора, что составляет ___________________ выплачивается в течении 5  (пяти) банковских дней  по факту ввода в эксплуатацию, что подтверждается  подписанными актами.

3. Передача права собственности на Оборудование, рисков случайной гибели и повреждения

Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с момента передачи Оборудования на складе Покупателя, указанном в п. 2.1. настоящего Договора, что подтверждается подписанным Сторонами Актом приема-передачи. Подписание Сторонами Актов осмотра Установки и Технологического оборудования на складе Поставщика не влечет перехода права собственности на Оборудование к Покупателю.

Датой поставки оборудования является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи без рекламаций.

Риски, связанные со случайной гибелью и случайными повреждением Оборудования, переходят к Покупателю в момент перехода права собственности.

4. Гарантии

Предоставленные Поставщиком гарантии установлены в Приложении 4 настоящего Договора.

5. Порядок поставки Оборудования и сдачи-приемки выполненных работ.

5.1. Не менее, чем за 3 (Три) дня до даты прибытия оборудования на склад Поставщика, Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к осмотру с целью проверки его комплектности. По итогам осмотра Оборудования Стороны подписывают Акт осмотра. Поставщик обязан не позднее сроков, указанных в Приложении 2 настоящего Договора поставить Установку и Технологическое Оборудование в упаковке (невозвратной тape), обеспечивающей сохранность Оборудования, до Склада Поставщика, указанною в п. 2.1. настоящею Договора, свободными от прав третьих лиц и готовыми к разгрузке, при условии.
что обязательства Покупателя, установленные и пунктах 2.2 настоящего Договора выполнены своевременно и в полном объеме. Поставщик обязан не менее, чем за 3 (Три) дня уведомить Покупателя о предполагаемой дате поставки Оборудования на Склад Покупателя. В лень поставки, Покупатель обязан осуществить приемку Оборудования путем подписания Сторонами Акта приема-передачи.

Разгрузка Оборудования производится Покупателем.

В течение 5 (Пяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи (по форме, согласованной Сторонами в Приложении №6) Поставщик обязуется предоставить Покупателю надлежащим образом оформленный инвойс.

Поставщик имеет право на частичную и/или досрочную поставку Оборудовании по согласованию с Покупателем.

5.2. После готовности оборудования к монтажу. Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление о готовности Оборудования к монтажу. Срок выполнения шеф-монтажных работ - в течение 3 (Трех) календарных педель с даты получения уведомления Покупателя при условии завершения Покупателем монтажных работ в эти же сроки. По завершении шеф монтажных работ. Поставщик предоставляет Покупателю 2 экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ. Покупатель обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней рассмотреть Акт и подписать его или направить в адрес Поставщика мотивированный отказ в подписании Акта. Работы по шеф-монтажу считаются принятыми с даты подписания Акта обеими Сторонами.

5.3. После готовности Оборудования к пуско-наладочным работам. Покупатель направляет соответствующее уведомление Поставщику. Срок- выполнения пуско-наладочных работ - в течение 2 (Двух) календарных недель с даты получения уведомления Покупателя, но не позднее __________________ года (при условии своевременного направления уведомления Покупателем). По завершении пуско-наладочных работ, Поставщик предоставляет Покупателю в 3 экземплярах Акт выполненных работ (по форме, согласованной Сторонами в Приложении №7) в соответствии с Перечнем пуско-наладочных работ, указанным в Приложении 5 к настоящему Договору. Покупатель обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней рассмотреть Акт выполненных работ и подписать его или направить в адрес Поставщика мотивированный отказ в подписании Акта выполненных работ. Работы по пуско-наладке считаются принятыми с даты подписания Акта выполненных работ обеими Сторонами.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Поставщик обязан одновременно с передачей Установки и/или Технологического Оборудования передать Покупателю принадлежности Установки и/или Технологического Оборудования, а также предусмотренные Приложением 1 настоящего Договора все технические документы (далее по тексту «Технические документы»).

6.2. В случае просрочки со стороны Поставщика поставки Оборудования. Поставщик выплачивает пени в размере 0,01% от стоимости непоставленного Оборудования за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости непоставленного Оборудования.

6.3. Покупатель обязан заплатить за принятое Оборудование в размере и в сроки, предусмотренные пунктом 2 данного Договора.

6.4. Поставщик, в случае просрочки оплаты поставленного Оборудования со стороны Покупателя Поставщик, имеет право потребовать выплаты пени в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от неоплаченной суммы.

6.5. Покупатель     имеет     право     предъявить требования, связанные с дефектами Оборудования (но качеству и количеству), при условии, что оборудования эксплуатировалась Покупателем в соответствии с техническими требованиями, указанными в Технических документах

6.6. В случае, потери, повреждений или уничтожения Оборудования Покупатель, уведомляя Поставщика, должен руководствоваться процедурой, установленной Приложением 3 настоящего Договора.

6.7. Покупатель не имеет права использовать торговые марки "_______________" во время рекламы или при любых иных маркетинговых мероприятиях без письменного на то согласия Поставщика.

7. Уведомления

Все уведомления, отправляемые в рамках данного Договора, должны быть составлены на армянском и русском языках и вручены лично, посредством курьерской службы, телекса или факса по адресам, указанным ниже. В случае вручения уведомлений лично, они считаются полученными в день их вручения адресату; в случае вручения при помощи курьерской службы уведомление считается полученным на день доставки курьерской службой, указанный в квитанции о получении, а в случае уведомления телексом или факсом на день получения электронного подтверждения. Стороны, уведомляя друг друга вышеуказанными способами, могут в целях уведомления изменить нижеуказанные адреса.

Уведомления Покупателю должны направляться по следующему адресу:

Уведомления Поставщику должны направляться по следующему адресу:

8. Приложения

8.1 Следующие Приложения являются неотъемлемой частью данного Договора:
Приложение 1- Цена, Технические спецификации и документы
Приложение 2- График поставки 
Приложение 3- Порядок рекламации 
Приложение 4- Гарантии
Приложение 5-Перечень пуско-наладочных работ 
Приложение 6-Акт приема-передачи оборудования 
Приложение 7-Акт выполненных работ
Приложение 8 – Техническое задание

9. Форс-мажор

В случае невыполнения обязательств, взятых в соответствии с данным Договором, Стороны будут освобождены от ответственности, если невыполнение обязанностей имело место вследствие возникновения каких-либо обстоятельств непреодолимой силы, включая войну, гражданские волнения, революцию, пожары, наводнения и прочие стихийные бедствия, правительственные решения или любые другие обстоятельства, происходящие вне разумного контроля Сторон.

Срок исполнения обязательств в подобных обстоятельствах отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства непреодолимой силы. Поставщик и Покупатель с предоставлением письменного уведомления (которое отправляется письмом или курьерской службой с подтверждением о доставке: в случае получения уведомления получающая сторона должна поставить об этом в известность отправляющую сторону) имеют право расторгнуть данный Договор, если по Договору выполнение взятых Поставщиком обязательств или их части вследствие наличия подобных обстоятельств отодвигается на срок более трех месяцев. Подобное расторжение Договора не влечет за собой какой-либо ответственности для любой из сторон, за исключением нижеследующего: Покупатель обязан выплатить Поставщику за доставленную Систему, а Поставщик обязан вернуть Покупателю выплаченные в соответствии с пунктом 2.2. все те суммы, по которым доставок произведено не было. 
Обстоятельства непреодолимой силы подтверждаются документом (справкой), выданным уполномоченным органом или Торгово-промышленной палатой.

10. Гарантии

Стороны настоящим подтверждают друг другу, что каждая из них на момент подписания данного Договора является компанией, надлежащим образом зарегистрированной и действующей в соответствии с законами РА, имеющей право владеть обособленным имуществом и самостоятельно осуществлять деятельность, в том числе подписывать и выполнять настоящий Договор; и что лица, подписывающие данный Договор, от имени каждого из них наделены соответствующими полномочиями.

11. Прочие положения

11.1. Все споры, возникающие в связи с данным Договором, которые не были разрешены путем переговоров, разрешаются в порядке, установленном законодательством РА. В отношении Договора применяется юрисдикция РА.
11.2. Данный Договор может быть расторгнут с обоюдного согласия сторон, путем подписания отдельного соглашения.
11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на армянском и русском языках. Каждой стороне предоставляется по одному экземпляру. В случае несоответствия между двумя текстами, превалирует русский вариант.
11.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя по данному Договору обязательств.

Приложение 2.

График поставки

Описание	Пункт назначения	Срок поставки	
Двигатель-Генератор 
	    ____________________	Не позднее «28» марта 2013	
Количество: 1(один)			
Технологическое Оборудование	    ______________________	Не позднее «28» марта 2013